공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 계단 미끄럼 방지대 설치공사

2. 공사위치 : 승강장 대합실간 육교.계단.산업계단.     경사로

3. 공사목적 : 계단 미끄럼 방지대 설치로 안전사고를 예방코자 함.

4. 개   요 :    계단 미끄럼 방지대 설치 :2300m

현장 정리 : 0000㎡

5. 공사기간 : 착공일로부터 00일

시 방 서

1. 일반사항

가. (적 용) 본 시방서는 계단 미끄럼 방지대 설치공사에  적용한다.

나. (시 공) 수급자는 본 시방서와 도면에 적합하게 성실히 시공에 임하여야 하며, 시방서에 명기되지 않은 사항은 관련법규 및 사회적 관례에 따른다.

다. (현장대리인) 수급자는 본 공사의 원활한 진행을 위하여, 해당분야  1년 이상의 경력자를 현장 대리인으로 선임하여야 하며, 현장대리인은 일일 작업 시행전 감독원에게 작업내용 및 명일 작업 계획을 제출하여야 한다.

라. (책 무) 공사 시행중에 발생되는 제반사고 및 사회적 물의, 회사의 재산피해는 수급자가 책임 변상한다.

마. (기 타) 시공과정에서 회사와 이견이나 경미한 추가사항 발생등에 대하여는 감독원의 지시나 회사의 해석에 따라야 하며, 공사비 및 공기단축을 위한 설계 변경 시 이에 의하여야 한다.

2. 주요자재

품 목	규 격	비 고
계단 미끄럼 방지대	STA0001 23㎜ x 70㎜ × 현장치수
접착제	Sika flex 221(폴리우레탄 습기형 접착제)

수급자는 주요자재의 샘플 및 제품설명서를 제출하여

귀사의 승인을 득한 후 설치작업에 임한다.

3. 설치장소

역 명	계단수(개소)	단수	평균폭(m)	연장(m)	비고
계	6	204단	1.6	326.4
일반계단	2	82	2.44	164	승강장.육교.학교계단,
산업계단	2	82단	1.2	98.4	공장.사다리.점검로.철재계단.외
경사로	1개소12m	40개	1.2	48	장애인슬럼프.식당주방,출입구.(아파트)

4. 안전관리

공사 착수전 수급자는 공사전반에 대한 안전교육을 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고, 공사 중 발생하는 모든 민,형사상의 책임은 물론 공단의 재산상 피해가 발생 하였을 때는 수급자가 배상한다.

공단 시설물에 피해가 발생되지 않토록 사전에 공사 현장여건에 대하여 시설물 점검 후 안전저해 요인은 철거 또는 이동설치 하여야 한다.

작업장 주변에는 가시설을 하여 작업자 및  이용자의 피해가 없도록 하여야 한다.

작업 현장에는 반드시 소화기를 비치하여야 하며 현장 주변은 항시 정리정돈하여 걸려 넘어지는 사고가 발생되지 않도록 한다.

5. 계단 미끄럼 방지대 설치

작업시간은 이용이 적은 시간(약 09:10경)부터 시작하여(약18:00경) 전까지로 한다.

미끄럼 방지대 양생을 위하여 경화시간 8시간을 확보하여야 하므로 우회 계단으로 안내하는 안내원을 현장에 배치시켜 민원 발생을 없애야 한다.

시공할 표면을 아세톤이나 유기용제를 사용해 깨끗이 닦아 내고, 토치등을 이용해 시공면에 열을 가하여 물기를 완전히 제거한다.

현장 여건에 따라 주변 오염을 방지하기 위하여 필요한 곳에 마킹테이프를 바르도록 한다.

전용 코킹건에 준비된 접착제를 장착하여 접착면에 도포한다. 제품의 뒷면을 사포질하여 접착력을 높여야 한다.

접착제를 도포한 바닥에 미끄럼 방지대를 올려 부드럽게 눌러서 붙인다.

경화된 후 설치된 제품 옆으로 삐져나온 접착제를 칼로 도려낸다.

5. 기타사항

일일 작업 시행전 감독원에게 작업내용 및 명일 작업계획을 제출하여 작업을 실시하여야 한다.

수급자는 당일공사 완료시 공사현장 정리정돈을 철저히 하여야하며, 필요시 안전조치를 하여야 한다.

일일 공사가 끝난 후 현장정리를 깨끗이 하여 시설물 유지관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

공사에 사용되는 용수 및 전기는 (우리사업소)에서 무상 공급한다.

수급자는 각 공종별 작업 전,중,후의 사진을 촬영하여 공사완료시 2부를 감독원에게 제출한다.

기타 도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항은 감독원과 협의하여 시행하고 공비절감과 공기단축을 위한 설계변경이 있을시 이에 응하여야 한다.